부산문화회관 챔버홀 조성공사

설계용역 과업지시서

2017.  1.

- 목     차 -

제1장    공  통  및  일 반 사 항

제2장    일    반       지    침

제3장    분 야 별 과 업 지 시 서

제4장      설 계 도 서 작 성 요 령

１장		공통 및 일반사항

1. 용역의 명칭 : 부산문화회관 챔버홀 조성공사 설계용역

가. 용역의 목적

○ 부산문화회관(이하 문화회관) 챔버홀 조성을 위해 국제회의장 리모델링으로 사용공간의 활용도를 높이며, 관객의 문화향유 기회 확대를 위한 음악전문공연 공간 조성을 위한 사업으로

○ 전문 음악인의 발표 기회의 확장에 기여하는 품격 있고 쾌적한 문화공연시설 창조를 위한 챔버홀 조성공사 계획 및 실시설계임

나. 용역의 개요

1) 위    치 : 부산광역시 남구 대연동 유엔평화로 76번길 1(대연동)

2) 시설개요

가) 규모 및 위치

- 부    지 : 48,424㎡               - 연 면 적 : 5,135.875㎡

- 구    조 : 철근콘크리트조         - 건축년도 : 1992년

- 위    치 : 소극장 2층 국제회의장(회의장, 대기실, 로비, 화장실, 영사실 등)

나) 시설현황(소극장)

층 수	건물용도	연면적	비 고
지하 1층	대연회장(영빈관)	2,387.2 ㎡
1 층	공연장(소극장, 분장실, 로비 등)	1,434.27 ㎡	객석(212석)
2 층	회의장(회의장, 대기실, 로비 등)	1,214.753 ㎡	국제회의장
3 층	회의장(영사실, 통역실, 기자실 등)	458.322 ㎡
계	문화 및 집회시설	5,135.875 ㎡

다) 공사개요 : 챔버홀 조성공사 (음악공연장, 편의시설 및 지원시설 포함)

라) 공사범위

구 분	주요계획	비고
음향시공(바닥,벽면,천정)	공연장 3면 목재시공	챔버홀 전용자재 특수시공
무대장치 개보수	무대 확장 등	87.6[㎡]
조명장치 개보수	조명시설
관람객석 경사면 바닥 설치	관람석 경사면 재시공	384[㎡]
관람객석 의자 설치	객석 400석
냉난방 공조시설 개보수	냉난방 공조시설 보수
녹음방송실 등 개보수	녹음방송실 구축	53.9[㎡]
출연자 대기/분장실 등 개보수	대기/분장실 개보수	53.1[㎡]
로비/화장실 개보수 등 기타	로비 및 화장실 등	193.55[㎡]/33.2[㎡]

※ 설계 진행과정에서 변경될 수 있으며, 최종 설계에 따라 확정함.

3) 추정용역비 : 77,500,000원 (※공사비 예산액 : 11억원, 부가세 포함)

4) 참가자격

가) 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사 면허를 소지한 자로 부산지역에 주된 건            축사사무소를 등록한 자(업체)로서 개설신고를 필한 자로 입찰공고일 전일부터           입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소(본사)의 소재지가 부산광

역시 내에 있는 업체

5) 용역기간 : 착수일로부터 50일(공휴일 포함)이내에 완료

가) 건축협의 등 인․허가 관련 기간은 용역기간에 포함한다. 단, 관계기관의 사정에 의하여 인․허가(심의) 기간이 지연될 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

나) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료한다. 단, 설계용역완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 다음 경우에는 발주기관 또는 수요기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피할 때

(2) 각종 심의․협의(인·허가 포함) 발주처 사정으로 작업중지 또는 연기의 필요가 있을때

(3) 천재지변 등 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 문화회관이 인정할 때

6) 설계 시 고려하여야 할 사항

가) 관련부서 협의 및 관계자 의견 검토 반영

나) 운영관리검토 : 각종 노후시설물 이용에 따른 안전사고 및 화재사고 사전예방 및 이용자 불편사항 해소, 보다 효율적인 유지관리 시스템 구축, 준공 후 수탁자의 연주 및 공연특성을 충분히 파악하여 최적의 공연이 이루어질 수 있도록 검토

다) 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

라) 현장여건의 조사결과 및 유지관리부서 요구사항 등을 확인하여 설계에 반영

마) 본 과업지시서에 미포함된 사항이라도 설계에 꼭 반영되어야 할 사항은 필히 검토반영하고 과업지시서에 포함되어있는 사항이라도 미반영 할 경우는 발주처와 협의하여 조치하여야한다.

바) 본 과업은 부산문화회관 챔버홀 조성 사업으로 운영부서(유지관리 운영주체)와 사전에 충분한 협의 후 설계에 반영하여야한다.

다. 과업의 범위

1) 설계 범위

건축․기계․전기․통신분야(소방 포함)의 설계지침에 따른 계획, 중간, 실시설계도서의 작성용역(용역성과물은 제반 인·허가 및 심의를 득한 성과물)

2) 용역범위

가) 계획, 중간, 실시 설계도서 작성

나) 공연장 건축음향컨설팅 및 건축음향설계보고서 작성

다) 공정표 작성(산출근거작성)

라) 각종 폐기물 철거 및 처리 설계

마) 건축 등 각종 인허가, 협의, 승인, 심의 등 발주처 대행, 필요 서류작성 및 제출처리(필요시)

바) 기술(설계)용역을 수행하는데 설계 감독관의 지시 및 지적사항에 대한 이행 및 보고서 작성

사) 기타 공사발주를 위한 설계도서 일체 및 발주기관이 업무와 관련되어 지시하는 일체의 요구사항

3) 별도 추가 업무

건축사법, 엔지니어링기술진흥법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무가 필요한 경우에는 수급인의 업무에 포함된다.

가) 내․외부 마감 상세도, 인테리어 디자인(색체계획 포함) 등 작성

나) 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한규칙에 의한 건축물대장 작성

라) 각종 보고서 작성 및 인쇄 등

4) 기타사항

가) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견에 따라 성실하게 수행한다.

나) 설계납품 후 수정사항이 발생하여 설계도서 수정요구가 있을 경우에는 계약변경 없이 설계를 보완 작성하여 제출하여야 한다.

다) 본 설계용역 수행 시 공사 준공일정(2017년 6월 이내) 등을 고려하여 공기단축방안을 각 분야의 설계에 적극 반영하고 예정공정표에 반영하여야 한다.

라. 제출서류

수급인은 용역착수 시에 다음 서류를 2부(착수계 1부 원본, 1부 사본) 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 건축음향, 기계 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 계약금액에 대한 산출내역서 1부.

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 10일 이내 제출)현황 1부

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

11) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2. 과업수행의 기본 방향

가. 설계의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 정보통신공사업법, 소방 관련법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법, 환경영향평가법, 도시교통정비촉진법, 자연재해대책법 등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 관계기관과의 건축협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품

납품은 계획, 중간, 실시설계도서 및 건축음향보고서 납품으로 구분하여 납품한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제 20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.(공제 가입)

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

4) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

5) 설계부실, 과오설계 등에 의해 건설기술진흥법 시행령 제87조 관련 별표8에 해당하는 경우 부실벌점 부여 등 관련법에 의거 처분될 수 있음.

6) 계획내용이 사업수행에 지장이 있거나 공사수행이 불가능한 등 하자가 있는 경우에는

발주기관의 검토․확인 등을 받아 수행 가능한 구상안으로 변경 하여야 하며 그렇지

않은 경우 책임은 계약상대자에게 있다.

7) 성과품을 성실히 검토하여야 하며, 공사시 설계하자 및 오류가 있을 경우에는 이를 무

상으로 즉시 수정․보완하여야 하고 최종납품 되는 성과품(음향 성능 포함)에 대한

책임은 본 용역의 계약상대자가 전적으로 책임을 진다.

8) 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약

상대자가 진다.

라. 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 건설공사의 수량내역서 작성 및 견적업무

나) 건축음향컨설팅 및 건축음향설계 업무에 수반되는 작업

다) 기계분야, 소방분야, 전기·통신분야의 도면작성 및 이에 부수되는 작업

라) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이때 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

사. 설계의 기본방향 및 개요

1) 건축법상 주요구조부에 대한 변경 필요시 최소 범위로 하는 것을 원칙으로 하고, 부득이하게 구조변경이 수반될 경우, 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진시설을 감안하여 설계하여야 한다.

2) 공연장의 충분한 건축음향 성능 검토 및 건축음향시설 개선계획을 통하여 관람객 및 공연자의 쾌적한 공연시설을 조성함으로서 공연문화의 만족도를 높일 수 있도록 설계하여야 한다.

3) 공연장 기존 무대 및 객석 환경의 문제점을 보완하여 고품질 공연 환경을 조성하고 공연 시설의 활용도를 높이는 방안을 마련하여야 한다.

4) 상징성, 경제성, 공공성, 에너지절약 등을 최대한 고려, 관련법규에 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

5) LED 조명, 고효율 장비 등을 채용하여 에너지 절약(절감)을 반영한 시스템을 구현하여야 한다.

6) 유지관리 및 보수가 용이하고, 증설 등을 고려하여 시스템의 유연성과 가변성을 구현하여야 한다.

아. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적인 자재, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 또는 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 하며,  그 외(외국산 자재 포함)의 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

3) 소방관계법 및 기타 관계법령을 적용한 자재 사용.

２장		일 반 지 침

1. 일반사항

가. 설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 건축, 건축음향, 기계, 폐기물, 기타 부대공사에 대한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

다. 건축, 건축음향, 기계, 통신, 전기, 무대시설 등 분야별 연계되는 사항을 면밀히 검토하여 원활한 시공 및 기능이 유지되도록 설계한다.

라. 각종폐기물 철거 및 처리 설계

1) 기존 마감재 및 석면 등 철거공사를 위한 설계서를 작성 한다.

2) 철거공사에서 발생될 건설폐기물 및 지정폐기물에 대하여 성상별로 분류하고 설계서(수량산출, 내역 및 시방서 등)를 별도로 구분 작성한다.

3) 철거공사에서 발생될 건설폐기물은 가연성, 비가연성, 혼합폐기물 등 성상별로 분리 작성 한다.

4) 철거공사에서 발생되는 고재 또는 기타 재활용 하여 공사비를 감액 할 수 있는 항목을 조사하여 설계서에 반영하여야 한다 .

마. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

바. 사전조사를 철저히 하여 우․오수관 위치, 급수 인입점, 전기 인입점, 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

아. 설계도서(설계도면, 내역서, 시방서, 일위대가표)에 특정제품 및 특정회사에 관한 사항이 명기되지 않아야 한다.

자. 제3자 단가계약, 다수공급자 계약, 우수조달물품, 특허ㆍ신기술 등에 의한 특정업체의 자재, 물품 선정이 불가피한 경우에 대하여는 세부 검토내용 등 근거자료를 제출하여야 한다.

- 특징, 장단점, 가격, 적용사례, 하자발생사례 등 자재(물품) 선정근거 제시(비교표)

- 제3자 단가계약, 우수조달물품 등 수의계약이 가능한 관급자재를 사용하고자 할 경우에는 부산시에서 추진 중인 “관급자재 구매관련 수의계약 부조리 방지방안“ 을 준수하도록 적극 협조해야 한다.

차. 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 직접구매 대상품목에 대하여 검토 반영 하여야 한다.

카. 기타 수요기관의 요구사항을 반영하여야 한다.

타. 건축 음향, 무대 음향, 조명, 장비 등 전문성이 필요한 설계 시 관련 전문가 및 수요기관 관계 기술자에게 자문 및 검토를 받아 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다. 이때 자문 및 검토에 대한 소요 비용은 용역자가 지불한다.

2. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간보고 : 주1회 작성(주말기준 작성후 익주 월요일 제출)〔월간공정보고서식〕

2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의      거 제출한다.

3) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제      출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

라) 설계자는 다음과 같은 경우에는 발주기관과 업무협의를 하도록 한다.

① 조사 및 자료 수집의 완료 시

② 계획설계 완료 시

③ 중간설계 완료 시

④ 실시설계 완료 시

⑤ 공정보고 시(필요시)

⑥ 준공 및 성과품 작성 시

2) 완료 보고회

가) 공정 90% 단계에서 실시설계 성과에 대하여 보고회(파워포인트)를 개최한다.

나) 과업수행자는 보고회 발표일 4일전까지 발표 자료를 발주처에 제출하여야 한다.

3) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 실시설계 등 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

4) 자문회의

설계 진행 시 시행착오 방지와 최선의 설계도서 작성을 위해 자문회의 시행과 이와 관련된 자료 제공 및 결과 작성·제출한다.

3. 보안성 검토

가. 설계 용역자는 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식       을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계 용역자는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3)	과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

3장		분야별 과업지시서

【건 축 분 야】

가. 건축 및 건축음향설계 범위

1) 대상건축물의 정밀한 음향 측정·분석을 통하여 음향 특성 및 전달경로를 파악하고, 음향시뮬레이션을 통한 매개변수 파악, 재측정과 재해석을 통한 오차범위 저감 등을 수반한 최적의 음향 개선 리모델링 계획을 수립하는 건축음향보고서를 작성한다.

2) 과업의 구체적인 내용이 실현되기 위한 설계도 등을 작성하고, 설계도를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성한다.

3) 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하야 하며, 이 도서는 기본 및 실시설계 완료 전에 각종 협의, 심의 및 인‧허가 등 행정절차를 거쳐 확정한다.

나. 건축 설계 일반사항

1) 기존건축물의 노후화로 인한 구조안전성 확인 및 개보수 공사로 인한 구조안전성 여부 검토 반영하여야 한다.(별도 발주된 구조검토용역 결과 연계 반영)

2) 예산대비 효율적, 경제적 보강·보수방법으로 건물 내․외부 환경개선 고려하여야 한다.

3) 문화회관의 특성을 고려한 내·외부마감재 선정 등을 고려하여야 한다.

4) 기존 시설물과의 적절한 연계성을 통해 입면구성 및 마감재료를 계획하여 미관 및 효율성 극대화하여야 한다.

5) 실공간 증축 발생시 발주처 사전검토내용을 바탕으로 시행하되 주변시설 기능을 저해하지 않고 진행하여야 한다.(준비사항 : 도시계획시설사업 실시계획인가신청)

6) 각 공간의 기능 확보 및 실별 연계가 최적이 될 수 있도록 공간 확보 대안을 계획 반영하여야 한다.(분장실/대기실, 녹음실 등)

7) 객석 내부(천정, 벽체, 바닥)마감시설은 건축음향기능, 색상 등을 고려하여 검토하여야 한다.

8) 천정 등 고소 작업함에 효율적인 방안계획을 하여야 한다.

9) 각 실의 내부에 설치되는 인테리어 가구(제작설치)는 계획평면에 배치되어야 하며 각 평면도에 표기가 어려울 시는 별도의 기구 및 장비배치 계획도를 작성하여야 한다.

10) 내부마감시설 설치계획에 따라 기존건물의 통일적인 입면구성을 해하지 않는 범위 내 마감재 부착 계획 등 입면구성을 진행하여야 한다.

11) 각실 마감은 실사용 기능 유지에 지장이 없는 내구성, 내습성 재료들을 선정하여 설계도면 및 설명서에 표기하여야 하고 건축화 조명 및 기구사용, 형태변화구상등 설계자의 의도가 충분히 반영 될 수 있는 공간구성에 주력하여야 한다.

12) 환경정비에 따른 철거공사 및 폐기물 처리ㆍ운반 관련 설계도서를 작성하여야 한다.

13) 관람객 안전시설을 보강하기 위하여 공연장 화재 발생 시 화염과 연기로 인한 2차 피해를 막기 위해 작동해야 하는 소방설비(스프링클러 등) 등 안전시설을 관련법규에 따라 검토·반영하여야 한다.

14) 로비 및 편의시설 환경개선

가) 로비는 공연장의 주 이동 동선으로 관람객들의 편의시설 디자인 개념으로 제안하며 이용객의 편의 및 동선을 고려한 검토 하여야 한다.

나) 분장실은 고급자재를 사용하여 쾌적한 환경으로 조성하며, 무대현황 모니터 및 스피커, 전신거울 등 필요한 시설을 갖추고, 방음 등을 개선하여 분장실 기능을 향상시킬 수 있도록 계획하여야 한다.

다) 화장실 개·보수 및 장애인 화장실 추가설치 등 장애인 편의시설을 관계법령에 따라 설치(보완)하는 사항을 제안하여야 한다.

다. 건축음향설계 특기사항

1) 문화회관 국제회의장 음향관련 현 실태

가) 문화회관 국제회의장은 최초 회의장으로 구성되어, 음악공연 장르를 소화하기에 적합한 음향성능과 가시선 확보에 대한 검토가 필요하고, 방음성능이 부족하여 내·외부 소음 유·출입 발생에 대한 대책 등 종합적인 건축음향 검토 및 설계가 필요한 실정임

나) 과학적 프로세스에 의한 건축음향컨설팅 및 음향개선 설계를 우선 진행하여 음향설계 결과에 근거한 국제회의장 시설개선공사 추진을 통해 관람객 및 공연자를 위한 쾌적하고 수준 높은 공연 예술 공간으로 조성코자함

2) 음향개선 설계 도면검토 및 현장조사

가) 대상 공간의 실내 마감 정보 및 평․단면 형태에 따른 음향검토

나) 실 사용자를 통한 음향에 대한 문제점 및 개선 요구사항 파악

다) 대상 공간의 주 활용목적 및 활용도 조사

라) 음향 개보수의 제한 요소 조사

3) 실내음향 측정 및 시뮬레이션 평가

가) 대상 공간의 음향특성, 소음특성, 차음성능 등 현재 음향 상태를 정확하게     파악하기 위해 실내음향 측정 실시

나) 실내음향 및 배경소음 측정 항목

측정항목	내 용
Impulse Responses	공간에서 음의 시간적 감쇠패턴을 조사함으로써 반사음 패턴을 분석
SPL(Sound Pressure Level)	각 좌석의 음압치와 전체 좌석별 음압분포를 분석
RT(잔향시간, Reverberation Time)	잔향감을 나타내는 요소로 음원이 멈춘 후 60dB까지 떨어지는데 소요되는 시간
EDT(Early Decay Time)	주관적 잔향감을 나타내는 요소, 음원이 멈춘 후 10dB까지 떨어지는데 소요되는 시간
C80(Clarity)	음악의 명료도를 나타내는 요소
D50(Definition)	회화의 명료도(요해도)를 나타내는 요소
LF(Lateral Energy Fraction)	측면 반사음의 정도를 나타내는 것으로 공간감을 나타내는 요소
TL(투과손실, Transmission Loss)	건축부재의 음의 차단성능을 나타내는 요소
배경소음	공간내부의 소음정도를 측정하여 NC(Noise Criteria)곡선 도출
※ 위의 측정 항목은 각 장르별 목표 예측치와 공사후의 결과치를 반드시 제출하여야 한다.

다) 효율적인 음향 개선안 조사 및 제안을 위한 컴퓨터 시뮬레이션 진행

라) 음향시뮬레이션 프로그램을 사용해 문화회관 챔버홀을 모델링

마) 조사된 마감 디테일 자료를 통해 시뮬레이션과 현장 측정값 일치화

바) 건축음향, 전자음향, 무대기계 및 무대조명 등의 종합적인 안을 비교 검토 하여야 한다.

사) 시공 전․후의 성능 개선여부를 객관적으로 판단할 수 있도록 하기 위해          시공 전․후에 음향진동성능에 대한 측정과 평가를 실시하여야 하며, 모든 측         정관련 장비 및 절차는 관련 ISO 규정이 정하는 기준과 국제인증기구               KOLAS(기술표준원) 교정, 시험, 검사 규정을 충족시키도록 이루어져야 하며         측정된 결과 데이터는 객관적인 분석과 컴퓨터 시뮬레이션 과정을 거쳐 실측         치와 예측치의 비교 검토를 통한 컴퓨터 시뮬레이터의 오차한계의 범위까지         표현된 상세한 시공 전․후 건축음향 성능 측정 및 평가 보고서를 작성             하여야 한다.

아) 음향성능 지표인 실내잔향시간(RT: Reverberation Time), 음압레벨           (SPL: Sound Pressure Level), 회화적 명료도(D50: Definition), 음악적 명료도(C80: Clarity), 음의 이해도(RASTI), 실내허용 소음기준(Noise Criteria)등의 설계기준은 음향진동 시뮬레이션 평가 확인 절차를 토대로 관련 전문가의 기술자문 및 검토에 따라 최종 결정한다.

4) 음향개선 작업의 기본방향 설정

가) 현장 측정을 토대로 나타난 문제점에 대하여 발주자, 건축설계자와 공연예술 관계자 등 관련자가 모두 참여해 다음과 같이 음향개선의 기본방향을 설정함.

① 실내음향요소의 목표 기준치 설정

② 다양한 용도에 적합한 최적 잔향시간을 비롯한 각종 음향특성 구현

③ 음의 반사, 확산, 흡음 특성 및 음압분포를 고려한 마감재료 선정과 배치

④ 음의 장애현상의 방지대책

⑤ 공연장 내․외부 소음방지 대책

⑥ 개보수 완료시 음향특성의 검증을 위한 측정 및 보완을 위한 대책수립

5) 기본방향 설정에 따라 다양한 음향개선안 제안

가) 설정된 기본 방향을 바탕으로 음향개선작업의 기본 방향에 따라 최적의 음향조건이 구현될 때까지 컴퓨터 시뮬레이션을 이용하여 공연장 내부의 마감재, 형태, 크기 등을 다양하게 적용함으로써 반복적으로 음향평가를 실시하고 동시에 가청화를 통한 실내 음향의 주관적 평가를 실시하여 최적 음향 설계안을 도출, 다음의 내용을 기본으로 하여 음향개선안을 제안.

① 최적의 음향조건을 만족하는 공연장을 구성하는 각각의 건축요소의 재료 및 형태, 크기, 면적 등을 제안함.

② 실내외 소음원에 대한 차음 대책 : 내․외부 소음원(도로 교통소음 등) 등으로부터 공연장으로 유입되는 소음 차단을 위한 대책 수립

6) 무대 공간

가) 기존 무대구조로 인해 발생하는 무대 기능의 한계를 고려하여 운영설비의 기능적 완성도를 높이고 공연장의 활용도를 제고할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

나) 제시된 무대 개선계획에 부합하는 적절한 설비계획이 제시되어야 한다.

다) 장기 사용으로 노후한 무대특장 설비(무대기계, 조명, 음향, 영상)에 대한 적절한 보완과 기능개선안을 제시하여야 한다.

7) 객석 공간

가) 신규 공연 관람석을 설치함에 따라 객석바닥 공사 후 객석의자 설치 방향과 내구성, 흡음 등이 용이하도록 설계되어야 하며, 객석의자 형태, 규격, 배치, 앞뒤(좌우) 간격등 사전조사 및 설치 방향을 제시하여야 한다.

나) 무대공연 시 관객이 생동감과 일체감을 느낄 수 있도록 객석과 무대를 계획하여 객석시스템을 계획하여야 한다.

다) 동선 분석 및 공간 재배치하여 각 영역별(관객, 출연자, 운영자)로 합리적으로 계획하고, 관객, 출연자, 운영자, 화물 동선은 간섭되지 않게 계획하여야 한다.

라) 공연의 집중도를 높이고 효율적인 공간활용이 가능하도록 좌석의 배열, 간격, 수량 등을 적절히 조정하여 계획하여야 한다.

마) 객석통로 바닥의 경사는 이용자들의 불편 및 안전사고 위험이 없도록 유념하여 계획하여야 한다.

8) 전기 음향

가) 음향컨설팅을 통한 명확하고 합리적인 목표 음향진동성능의 제시를 시작으로 해당 공연장의 활용방향과 운영 특성 등을 면밀히 분석하여 한 후 공간에 맞는 최적의 전기음향을 검토하여야 한다.

나) 음향시스템의 계획 시 발주처 및 운영자의 다양한 요구조건을 토대로 컨설턴트와의 협의를 통해 확실한 목표음향진동 성능을 제시한 후 검증된 제품의 선정과 숙련된 시공기술의 도입으로 최선의 음향환경을 구축해야 한다.

다) 효율적인 신호 인프라 구성과 라이브 실황을 효과적으로 확성 및 녹음, 재생할 수 있는 음향 시스템에 대한 설계를 기본으로 하며, 음향시스템의 운영에 필요한 시설 외에 공연 전반에 걸친 지원시스템과 무대연락설비가 효과적으로 설계되어야 한다.

라) 기존 장비에 대한 재사용 여부와 철저한 철거계획 설계를 시작으로 장비의 최종 성능 테스트 단계까지의 내용을 설계하는 것을 원칙으로 하며, 하기의 기자재설계 확정 이전에 음향 담당자와 컨설턴트를 통하여 확정하여야 한다.

① 스피커 시스템

② 파워앰프 시스템

③ 믹싱콘솔 시스템

④ 신호전송 인프라 시스템

⑤ 전원공급 및 접지, 전기시스템

⑥ 중계차 선로 및 중계 외함

⑦ 무대연락설비(유무선 인터컴, 페이징 스피커)

⑧ 영상 시스템

9) 무대 기계

가) 노후설비를 건축 공간 내에서 현대화된 장비로 교체하면서 안전하고 합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획하여야 한다.

나) 현재 설치된 무대기계의 상태를 정확하게 파악한 후 신설, 재활용 및 철거를 정확히 구분하여 설계를 진행하여야 한다.

다) 무대 기계는 KS A 6110 무대시설의 설계 안전 기준에 부합하도록 설계되어야 한다.

라) 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, KS 표시품이 없는 경우는 국산 최우량 품을 사용하여야 한다.(외국산 자재는 도입국의 관련 법규 및 규정을 적용하여야 한다.)

마) 각종 설계 시 필요한 계산서(부하계산서, 간선 전압강하계산서 등) 및 감독원이 요구하는 검토서(자재선정, 신기술 설계적용 등)를 작성, 제출하여야 한다.

바) 기존 간선은 현장 확인하여 신설 또는 재사용 가능한 부분은 재사용토록 설계하여야 한다.

사) 무대제어시스템은 최신의 방식으로 설계하여야 한다.

아) 신설되는 모든 설비는 기존 시설물과 조화를 이루어야 한다.

자) 본 설계 시 기존부분과의 연계 등을 검토하여 사용에 안전하도록 설계하여야 한다.

10) 무대 조명

가) 조명시스템의 계획 시 전문컨설턴트와의 협의를 통해 확실한 설계 목표를 제시한 후 검증된 제품의 선정과 숙련된 시공기술의 도입으로 신설, 재활용 및 철거를 정확히 구분하여 최선의 조명환경을 구출할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 노후된 조명설비를 건축 공간 내에서 현대화된 장비로 교체하면서 안전하고 합리적인 배치와 효율적인 운영이 가능하도록 계획한다.

다) 클래식 음악 공연 시 전체 조도를 고루 밝게 할 수 있는 조명 시스템을 구성하고 조명기구는 음향 마감에 의해 영향을 받지 않도록 천정에 매입하여 설계 및 시공한다.

라) 음악공연을 소화하기에 적합하도록 위치와 시스템 등 조명 연출이 용이하도록 구성한다.

마) 기존 장비에 대한 철저한 철거계획 및 재사용 설계를 시작으로 장비의 최종 성능 테스트 단계까지의 내용을 설계하는 것을 원칙으로 하며, 아래의 기자재설계 확정 이전에 음향 담당자와 컨설턴트를 통하여 확정하여야 한다.

① 디머시스템,  CONTROL SYSTEM

② 배관 배선 교체 및 신설(통신 인프라 확충)

11) 개선안에 대한 관계자 협의 및 최종 개선안의 확정

- 개선안에 대한 관계자와 음향설계자, 건축설계자 그리고 공연예술 관계자와의   포괄적인 협의를 통해서 음향 개보수의 제한요소를 최종적으로 확인하고 음   향 개선안의 최종안을 결정.

12) 최종 개선안 현장 적용 및 감리

- 최종 확정된 개선안의 현장 적용

- 공사기간 중 개선안이 왜곡되지 않도록 주기적인 감리 실시

13) 시공 후 실내음향 재측정을 통한 음향 성능 평가

- 시공완료 후 최종적인 실내음향의 재측정을 통해 개선된 음향 성능을 평가하 고, 공연예술 단원을 대상으로 한 시험 연주를 통해 추가적인 문제점 및 수정사항 도출

14) 추가 수정 및 보완을 통해 최적화된 음향 공간 완성

- 최종 수정 및 보완을 거쳐 목적에 맞는 최적 음향 설계된 공연장으로 완성.

15) 음향설계 시설개선 리모델링 계획의 수립은 관련 전문업체인 소음․진동분야 환경전문공사업 또는 소음진동 기술사사무소 면허를 소지한 업체와 함께 진행하여야 한다.

16) 음향컨설팅 및 음향설계용역은 건축음향 및 진동 분야에 대한 설계 및 준공        단계까지 일관적이고 지속적인 기술 지원을 제공하여야 하며, 설계 또는 시공         과정에서 발생할 수 있는 변경요인에 대한 검토와 대안의 제시하도록 하여야        한다.

【기 계 설 비 분 야】

가. 일반사항

1) 계약상대자는 본 과업지시서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 설계하되, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

가) 공조시설 현황파악

나) 실시설계에 필요한 자료 수집 및 검토

다) 도면 및 부하용량계산서 작성

라) 자재규격서 및 시방서 작성

마) 수량산출서 및 설계 내역서 작성

바) 자재규격서 및 시방서 작성

사) 기타 설계에 필요한 사항

2) 설비기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙을 준수하여야 한다.

3) 설계도서는 도면, 시방서, 보일러, 냉․난방부하계산서, 소요자재의 용량 계산서 및 장비의 용량계산서 등을 포함하여야 한다.

4) 필요 장비설치 시 철거장비에 대하여 재사용 등을 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

5) 기계설비 장비에 관련되는 건축, 전기, 무대시설에 있어 분야별 업무범위 구분을 명확히 하여 도면 또는 보고서에 표기하여야 한다.

6) 위생시설 및 방화안전시설 설치하도록 설계에 반영하여야 한다.

나. 특기사항

1) 공연장 객석부의 급기ㆍ환기구(바닥, 벽체, 천정)는 기존마감재 오염과 공사 시 내부마감 및 필요시 객석의자 설치에 따른 상호간의 간섭문제가 발생할 수 있어 충분한 사전협의가 필요하며 기구커버시설 검토가 설계에 반영되어야 한다.

2) 보일러 및 공조시설(자동제어) 교체 기존시설 기능연계 하여 장비 설계하여야 한다.

3) 각종 실구획 재검토에 따른 내부 공간 변경 시 공조 급기구와 배기구의 수량을 일정 비율로 배치시켜 냉․난방부하가 변동되지 않도록 설계 시 기술적인 검토와 사전협의를 거치도록 한다. (개별 냉ㆍ난방기 이동 및 신규설치)

4) 각실 내부 공간 변경 시 소방시설 등에 영향을 줄 수 있으므로 소방시설기준에 적합하도록 설계되어야 한다.

【전기·통신 설 비 분 야】

가. 전기설비분야

1) 모든 시설은 전기설비기술기준령에 의거 설계한다.

2) 전기설계는 안전성, 신뢰성, 경제성 및 정확성을 기함으로서 능률적이고 양질의

설계가 되도록 한다.

3) 건축공사에 수반되는 전기 이전비 및 지장물 이설비, 기존시설물 철거비를 반영한다.

4) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 의거 작성하여야하며, 시공 시

공인기관 실험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기한다.

5) 고효율 램프 설치와 화장실 등 재실 감지기 설치를 검토한다.

6) 설계도에는 관련분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며,

System 계통도 및 기기수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

7) 소방관계법령에 적합한 소방 제반설비 검토 및 반영한다.

8) 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재단가를 최우선 적용한다.

나. 통신설비분야

1) 모든 시설은 전기통신설비기술기준에 의거 설계한다,

2) 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향

하고, 운용 및 확장이 용하도록 하여야 한다.

3) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(정보통신)에 의거 작성하여야하며, 시공 시

공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기한다.

4) 설계 및 시공은 공인 인증된 업체이어야 한다.

5) 설비의 각종 장비, 주변기기 등을 설계에 포함하여야 하며, 이전비 및 지장물

이설비를 산출하여 반영한다.

6) 설계도에는 관련분야(건축, 설비, 전기 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야

하며, System 계통도 및 기기수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

【소 방 분 야】

가. 소방 설비

1) 모든 시설은 소방법 시행령 및 시설기준규칙에 의거 설계한다.

2) 관계법규에 적합한 자동화재탐지설비, 피난설비, 비상방송설비, 비상조명설비 등을

설치하도록 한다.

4장		설계도서 작성요령

1. 설계도서 작성기준

가. 건축법시행규칙 제6조 제1항 [별표2] 및 국토교통부 고시 제2012-553호

(‘12.08.22)의 설계도서 작성 기준에 의한 도서

나. 부산광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

다. 결정된 각종시설의 형식 및 기준을 검토하여 세부적인 설계도서를 작성한다.

라. 설계도서 작성

1) 설계도서 작성은 문화회관이 지정하는 규격으로 한다.

2) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

3) 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

4) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공도가 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 각 실의 실내장식은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여 설계하고 더 이상의 실내장식 검토가 되지 않도록 구체적인 재료와 특성이 표시된 도서를 작성하여 완벽하게 설계한다.

5) 각 설계도는 관련법규 및 문화회관의 공사시행 과정을 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 한다.

2. 설계설명서

가. 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.

나. 설계설명서에는 설계조건 적용 등 특수사항을 표기하여야 한다.

다. 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요․면적․규모․층고․일반 및 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 시설의 기능․용도․설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거가 되도록 작성한다.

라. 기타 세부도면 작성 및 분류는 문화회관의 지시에 의한다.

3. 시방서

가. 일반시방서 : 환경 및 안전관리 대책을 비롯한 공사관련 필요한 사항과 유의하여야 할 일반적인 사항 명시

나. 특기시방서 : 일반시방서에 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 사항 명시

다. 기자재시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성․운영방법․제작조건 및 기준 등을 명시

라. 공종․기기별 누락없이 상세히 기록

마. 기타 문화회관 요구 시방서

4. 설계도면

가. 설계도면은 문화회관에서 지정하는 규격으로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

다. 과업시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주구분별로 편철하여 도서목차,  배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

라. 도면 제작 중 중복이 있을 경우 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다. 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 있다.

1) 국토교통부 고시 제2012-553호(‘12.08.22)의 설계도서 작성 기준에 의한 도서

2) 부산광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

3) 기타 공사시행에 필요한 도면(구분발주가 예상되는 공종은 별도 작성 요함)

5. 공사비 내역서

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다

나. 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 부산광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료” 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여  최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(2개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다.

단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 국내 생산품중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 문화회관과 협의하여 적용한다.

라) 실적공사비 적용이 가능한 공종에 대하여는 관련 규정을 적용한다.

2) 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 적의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정 한다.

다) 사용단위는 미터법 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

3) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량,  제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) K.S품에 없는 제품을 사용할 때 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국 규격등)등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “지방자치단체 공사계약일반조건 제5절(공사계약의 이행) 2.(공사자재의 검사) 및 3.(관급자재 및 대여품)“ 규정에 따라 운용‧관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

라) 문화회관이 공급한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 문화회관의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 문화회관의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 시는  즉시 물량을 산출하여야 한다

4) 일위대가표 : 정부표준품셈에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표상 이의사항이 있을 경우 감독원과  반드시 협의하여야 한다.

6. 공 정 표

가. 본 과업의 공사 공정표(PERT, CPM 등)는 공사의 내용파악(주‧부공정의 구분, 공종별 상호연계 및 충돌여부 등)이 용이하도록 상세하게 작성한다.

나. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 문화회관이 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

7. 설계 종합보고서 및 건축음향 보고서

가. 설계 종합보고서는 설계완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및  기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야한다.

나. 설계 종합보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며 다음 사항을 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 범위

3) 과업의 내용

4) 사전 조사내용 요약

5) 설계기준

6) 설계안별 검토내용

7) 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

8) 주요자재 및 수급계획

9) 시공계획

10) 도면첨부

11) 건축음향설계도서 목록 및 표시사항

구 분	도서종류	표 시 하 여 야 할 사 항
도서	기본 계획	․설계 개요 ․건축음향 개선 범위와 목표 ․본 설계에 적용된 특수한 공법 기술 기준, 시설물에 대한 설명 ․각종 설비의 기술사항 및 품질 확보를 위한 대책의 구체적 설명과 파악 자료, 측정, 분석타당성 ․사례조사 및 비교 검토(해외 및 국내 공연장) ․흡음, 반사 계획 및 진동 소음 등 환경소음 계획 ․설계에 필요한 특기 사항 ․주요 자재의 선정서 ․기타 필요한 사항
	측정 자료	․현재 건축음향의 측정 및 공사 후 예측 분석 비교(각 공연장르별)
	기본설계도	․기본도면, 개략내역, 시방서
	시뮬레이션 데이터도 및 모델링	․예상되는 시뮬레이션 데이터 음압 분포도, 명료도, 음선도, 위상간섭 예측도, 잔향시간, 음압레벨, 직접음과 간접음의 비, 주파수 특성 등 ․각종 시뮬레이션 데이터의 정확도 및 방식(프로그램명) ․각 장르별 음향목표
	기 타	․기타 도면 및 각종상세도(시공상 특기 사항)

8. 성과품 제출

설계도면 및 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 선정된 CD - ROM 저장프로그램으로 저장된 CD - ROM으로 제출하여야 하며, 내역서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정된 프로그램으로 작성된 CD - ROM을 제출하여야 한다.

가. 설계용역 보고서(건축음향보고서 포함) 5부.

나. 음향진동 보고서 5부.

다. 설계도서 원도 및 원고일체

라. 설계도서

1) 설계설명서 5부

2) 설계도면 A3 5부 (책자형)

3) 시방서 (일반, 특기, 자재시방서) 5부

4) 수량산출 조서 5부

5) 단가산출 조서 5부

6) 설계내역서 5부

7) 설계도서는 각 분야별로 감독원 지시에 따라 작성 제출한다.

8) 투시도 2점(60×90Cm 내외), 투시도 파일(.jpg 파일, CD)

마. 각종 계산서 5부

바. 기  타 : 제품의 카다로그 취급설명서, 견적서, 참고자료 등

사. 기타 문화회관에서 요구하는 성과품과 설계내역서중 단가 미기재 내역서의 수량은 별도 감독원의 지시에 의한다.

<붙임 1>

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 용 역  명  : 부산문화회관 챔버홀 조성공사 설계용역

○ 계약 금액  : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년    월    일

○ 착수년월일 :      년    월    일

○ 완료년월일 :      년    월    일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2017년    월    일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

(재)부산문화회관 대표이사 귀하

<붙임 2>

보  안  각  서

용  역  명 : 부산문화회관 챔버홀 조성공사 설계용역

1. 본인은 부산문화회관과 계약한 위 용역을 수행함에 있어 계약조건의 제반보안사항을 준수할 것이며, 본 용역을 수행 상 대내외적으로 지득한 모든 사항에 대하여 타인에게 누설하거나 귀 기관의 승인 없이 정보 및 자료를 제공 또는 대여하지 않겠습니다.

2. 만약 보완 대책을 소홀히 하거나 이행치 않아서 보안상 문제점이 발생할 때에는 부산문화회관의 어떠한 조치나 처벌도 감수할 것을 서약하고 이에 각서를 제출합니다.

2017 .    .

주             소 :

상             호 :

법인(주민)등록번호 :

대             표 :                  (인)

<붙임 3>

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 부산문화회관 챔버홀 조성공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ~ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :              (인)

(재)부산문화회관 대표이사 귀하