	계약심사 결과 통보서

1. 사업개요

사 업 명	부산문화회관 챔버홀 조성공사	요청기관	부산문화회관
위 치	남구 유엔평화로 76번길 1
사업 내용	1. 공사내용 : 국제회의장(회의장,대기실,로비,화장실) 1,214.75㎡
	- 내부 벽체,바닥 리모델링 및 음향시공
	2. 총공사비 : 881,648천원(도급741,200천원,관급137,025천원)
	3. 공사기간 : 착공일로부터 90일

2. 심사조정 총괄

(금액 : 천원)

구 분		신청금액	심사금액	증·감액	증감율
건 축	합 계	881,648	811,382	감)70,266	감)7.97%
	도 급	741,200	670,934	감)70,266	감)9.48%
	관 급	137,025	137,025	-	-
	폐기물	3,423	3,423	-	-

3. 심사조정 내용

구분

검토항목

심사결과 조정내용

관련

규정

공사

설계

도서

검토

1.시방서 작성

적정 여부

2.설계내역서

단가산출

적정여부

3.품셈적용

적정여부 및

계산착오

여부

4. 기타 설계

내역서적정

여부 등

1. 도장공사 노무비 품 조정

○ 수성페인트 칠 노무비 : 붓칠 → 롤러칠

- 2017년 칠공사 표준품셈 적용

품 명	단위	요청내용		조정내용
수성페인트칠 (붓칠→롤러칠)	㎡	도장공	0.066	0.036
		보통인부	0.012	0.006

구분

검토항목

심사결과 조정내용

관련

규정

공사

설계

도서

검토

1.시방서 작성

적정 여부

2.설계내역서

단가산출

적정여부

3.품셈적용

적정여부 및

계산착오

여부

4. 기타 설계

내역서적정

여부 등

2. 목공사, 수장공사, 금속공사 노무비 조정

○ 방부각재틀, 벽체각재틀, 목모보드 설치, 제진성차음

시트 붙임 공사는 표준품셈 적용

품 명	단위	요청내용		조정내용
방부각재틀	㎡	보통인부	0.04	0.02
벽체각재틀	㎡	보통인부	0.04	0.02
목모보드설치	㎡	건축목공	0.091	0.05
		보통인부	0.039	0.01
제진성차음시트 (벽체)	㎡	내장공	0.045	0.033
		보통인부	0.031	0.016
제진성차음시트 (천정)	㎡	내장공	0.0585	0.429
		보통인부	0.0403	0.0208

○ 잡철물제작설치 → 부대철골 가공설치

- 현장여건에 적합한 설치품 적용

품 명	단위	노무비 품셈
		요청		조정
잡철물제작 (간단)	kg	철공	0.0218	-
		보통인부	0.00056	-
		용접공	0.00221	-
		특별인부	0.00063	-
잡철물설치 (간단)	kg	철공	0.00585	-
		보통인부	0.0001	-
		용접공	0.00039	-
		특별인부	0.00011	-
부대철골 가공설치	kg	철공		0.005
		보통인부		0.00066
		용접공		0.0026
		특별인부		0.00074

▷ 조정으로 노무비45,269천원 상당 감액

5. 공통사항

1. 신기술 및 특허공법을 포함할 경우에는 기술자문위

원회(시민참여)를 거쳐 신기술 및 특허공법을 선정하고,신기술(특허)보유자와 「기술(특허)사용협약」체

결이 필요함.

2. 주요 공사용 자재는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제12조 및 동법 시행령 제11조 규정에 의거 발주자가 직접발주(관급)하는 방안 검토.

구분	검토항목	심사결과 조정내용	관련 규정
	5. 공통사항	3. 공사에 소요되는 자재는 지역경제 활성화 대책 일환으로 부산지역에서 생산하는 자재를 사용토록 검토반영 4. 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법과 단가가 낮은 항목이 있는 경우 반영 후 발주
○ 위와 같이 심사한 결과 당초 총공사비 881,648천원(도급 741,200천원, 관급137,025천원) 을 811,382천원(도급670,934천원,관급137,025천원)[감70,266천원(감7.97%)]로 조정함

.  끝.