리모델링 공사 일정(안)

구분		세부내용	2019년							비고
			6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
리모 델링 공사	지붕 개선 공사 (15억)	□ 설계용역 계약 심사 및 일상 감사(시 감사관실)	6/7							기상상태고려 준공일 변동 가능
		□ 공사업체 입찰 및 선정
		□ 공사 착공 및 공사
		□ 공사 준공
	내진 보강 공사 (15억)	□ 공법 선정에 따른 실시설계 진행	6/26
		□ 설계용역 계약 심사 및 일상 감사(시 감사관실)
		□ 공사업체 입찰 및 선정
		□ 공사 착공 및 공사
		□ 공사 준공
	무대 자동화 공사 (17억)	□ 자동화 이후 소요전력 증가 대비 사전 준비								전기증설 5억 별도
		□ 자동화 설비 기본설계
		□ 자동화 설비 실시 설계
		□ 설계용역 계약 심사 및 일상 감사(시 감사관실)
		□ 자동화 장비 제작 발주
		□ 자동화 설비 현장 설치	2020년 1월~4월
		□ 자동화 설비 시운전	2020년 5월