특 별 시 방 서

▣ 부산문화회관은 공연장 특성상 공연 및 리허설 등의 이유로

토, 일요일 및 오후 3~4시 이후 공사가 불가할 수 있음을 숙지한다.

이에 공연일정을 확인 후 공사를 진행하여야 한다.

1. 공사현장 관리

(1) 공사현장의 관리는 노동법(근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로보존관리규칙), 안전관리법, 환경보전법, 기타관계법규에  따라 이행하여야 한다.

(2) 현장대리인은 시공 근로자 및 기타인의 출입을 감독하고 시공 근로자의 풍기단속, 위생처리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며. 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

(3) 현장 내에는 안전관리책임자를 두어 안전교육실시 및 안전사고를 예방하여야 한다.

(4) 시공도중 소음, 진동 등 기타 일체의 공해로 인한 인접건물 또는 제3자에게 피해가 미치지 않도록 공해관리에 유의하여야 한다.

(5) 공사현장은 항상 기자재를 정리하고 청결하게 유지하여야 한다.

2. 현장대리인 상주

(1) 계약상대자는 본 공사의 적정한 수행을 위하여 현장대리인을 선임하고 본 공사의 진행시 현장에 상주시켜야 한다.

(2) 현장대리인은 공사 진행 및 기타사항 일체에 대해서 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

3. 공사 진행 보고

(1) 현장대리인은 공사의 진도, 현장인부 출입인원, 재료의 반입, 각종검사 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일일 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 현장대리인은 공정계획이 바뀔 때 마다 세부공정 계획을 수립하여 감독관에게 제출하여야 하며 자재(폐자재 포함) 반출 시는 감독관의 승인을 득한 후 반출하여야 한다.

4. 행정서류 제출

계약상대자는 공사 보고서, 주요부분 또는 협의를 요하는 시공 상세도, 각종장비 시험성적서,  각종 인·허가 서류 사본 기타 필요한 서류를 적정시기에 제출하여야 한다.

5. 청소와 뒤처리

철거된 콘크리트. 보온재 및 기타 관련된 부산물 등을 건축물 폐기물로 분류하여 환경보전법 산업폐기물관리법에 위배됨이 없도록 지정폐기물 및 일반폐기물 처리업을 등록한 자에게 적법하게 처리하여야 한다.